Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка качества и объемов выполнения работ по муниципальному контракту от 11.08.2023 № 025_345475 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений нежилого здания сельского дома культуры с. Парная» 
04.06.2024
	
Основание контрольного мероприятия: Порядком осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Шарыповского муниципального округа контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 11.11.2022 № 733-п, пункт 1.4. плана работы контролера - ревизора отдела по контролю и безопасности администрации Шарыповского муниципального округа на 2024 год, утвержденного распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа от 28.12.2023 № 624-р (в ред. от 29.01.2024 № 22-р), распоряжение Главы округа от 07.05.2024 № 206-р о проведении планового контрольного мероприятия.
Предмет контрольного мероприятия:  качество и объемы выполнения работ по капитальному ремонту помещений нежилого здания сельского дома культуры с. Парная.
Цель проведения контрольного мероприятия: качественное выполнение работ по капитальному ремонту помещений нежилого здания сельского дома культуры с. Парная.
Объекты контрольного мероприятия:
- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» Шарыповского муниципального округа;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа.
По результатам контрольного мероприятия 
1.	Не внесены изменение в распоряжение администрации Шарыповского муниципального округа от 11.10.2023 № 464-р «Об усилении контроля качества выполняемых работ по строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности» в части состава комиссии.
2.	При проверке МК установлено, что в текстовой части в преамбуле и в абз. 2 п. 2.1 МК неверно указана дата протокола № 0319600003723000025 от 31 июля 2023 года, а в МК указана дата 31 августа 2023 года. дополнительным соглашением от 28.05.2024 № 3 внесены изменения в МК.
3.	В соответствии с п. 4.2.5 МК и раздела 4.1 технического задания к МК уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществлена подрядчиком.
4.	В соответствии с п. 4.2.9 МК подрядчик предоставил документы, подтверждающие качество применяемых материалов: сертификаты, паспорта качества на используемые материалы (заверенные копии или материалы).
5.	Подрядчиком ООО «СтройГрад» работы выполнялись согласно графика производственных работ по капитальному ремонту помещений нежилого здания сельского дома культуры с. Парная.
6.	В проектную сметную документацию внесены изменения по видам и объемам работ. Все вносимые изменения в проектно – сметную документацию согласовывались с проектировщиком, оформлялись протоколами с оформлением необходимой документацией.
7.	Цена муниципального контракта увеличена в сумме 2 541,39 тыс.руб. или на 9,9%.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Руководителю  МБУК «ЦКС» ШМО:
1.	потребовать от подрядчика надлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту;
2.	усилить контроль при приемке выполненных работ по капитальному ремонту помещений нежилого здания сельского дома культуры с. Парная;
3.	потребовать от подрядчика устранения выявленных дефектов и недостатков при приемке выполненных работ.
Предоставить план мероприятий по принятым мерам по устранению выявленных замечаний и нарушений до 15 июля 2024 года.

Контролер-ревизор	      
отдела по контролю и безопасности      
Администрации Шарыповского
муниципального округа                                                                             		И.В. Шмидт

Руководитель 
МКУ «ЦКС» ШМО				        	                                                       А.С. Волкова