Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка качества и объемов выполненных работ по муниципальному контракту от 28.11.2023 № ЭА_20143/23 на приобретение контейнерного оборудования в с. Березовское и муниципальному контракту от 05.12.2023 № ЭА _22012/23 на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления отходов потребления на территории с. Березовское Шарыповского муниципального округа в 2023 году»

17.05.2024
                                                                                                                                           
Основание контрольного мероприятия: Порядком осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Шарыповского муниципального округа контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 11.11.2022 № 733-п, пункт 1.3. плана работы контролера - ревизора отдела по контролю и безопасности администрации Шарыповского муниципального округа на 2024 год, утвержденного распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа от 28.12.2023 № 624-р (в ред. от 29.01.2024 № 22-р), распоряжения исполняющего полномочия главы округа от 16.04.2024  № 163-р о проведении планового контрольного мероприятия.
Предмет контрольного мероприятия: выполнение обязательств предусмотренных муниципальным контрактом от 28.11.2023 № ЭА_20143/23 на приобретение контейнерного оборудования в с. Березовское и муниципальным контрактом от 05.12.2023 № ЭА _22012/23 на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления отходов потребления на территории с. Березовское Шарыповского муниципального округа.
Цель проведения контрольного мероприятия: проверка качества и объемов выполнения работ по приобретению контейнерного оборудования и обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления на территории с. Березовское Шарыповского муниципального округа.
Объекты контрольного мероприятия:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа;
- Березовское территориальное подразделение администрации Шарыповского муниципального округа.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1.	В приложение № 1 «Техническое задание»  муниципального контракта от 28.11.2023 № ЭА_20143/23 внесены изменения в части данных о нахождении мест для расстановки контейнеров накопления твердых бытовых отходов. Изменения внесены в связи с изменением адресности обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления на территории с. Березовское Шарыповского муниципального округа. Данные характеристики не привели к ухудшению качества контейнерного оборудования, а объём был сохранён.
2.	В соответствии с п. 3.5 муниципального контракта от 28.11.2023 № ЭА_20143/23 ООО Компанией «Передовые технологии» предоставлены копии сертификатов соответствия на контейнеры накопления твердых бытовых отходов.
3.	Нарушений по исполнению муниципального контракта от 28.11.2023 № ЭА_20143/23 не установлено
4.	При составлении реестра мест (площадок) накопления отходов потребления в с. Березовское на момент подачи заявки на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Шарыповского муниципального округа в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в период с января по конец марта 2023 года оказалось, что данные места были выбраны некорректно по причине того, что некоторые площадки находились над линией теплосети, водопровода, под воздушной линией электропровода и близким расположением к жилым домам, что не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. В связи с этим принято решение перенести площадки накопления отходов в места, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
5.	По муниципальному контракту от 05.12.2023  № ЭА-22012/23  Подрядчиком ООО «СЕРВИС-КОМ» работы по обустройству мусорных площадок выполнены не качественно фундаментные плиты железобетонные рассыпаются и разрушаются
6.	По муниципальному контракту от 05.12.2023  № ЭА-22012/23 по адресу ул. Больничная, 25 с. Березовское подрядчиком ООО «СЕРВИС-КОМ» работы выполнены не качественно, каркасная обшивка мусорной площадки больше фундаментной плиты железобетонной и не забетонирована, что приведет к риску разрушения каркаса.
7.	Подрядчиком ООО «СЕРВИС-КОМ» нарушен п.п. 3.4.9 муниципального контракта от 05.12.2023  № ЭА-22012/23, не представлены сертификаты и паспорта качества на используемые материалы (цемент, каркас, трубы).

По результатам контрольного мероприятия предложено:
Руководителю  МКУ «УСЗ» Шарыповского муниципального округа:
1.	потребовать от подрядчика надлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам;
2.	проверять ход и качество выполнения подрядчиком условий муниципальных контрактов;
3.	усилить контроль по выполнению работ и обязательств по муниципальным контрактам;
4.	выставить претензионное письмо в соответствии с п. 3.4.4 МК от 05.12.2023  № ЭА-22012/23  об устранении всех выявленных нарушений в части качества выполненных работ;
5.	потребовать подрядчика переделать мусорную площадку по адресу ул. Больничная, 25 с. Березовское;
6.	затребовать у подрядчика ООО «СЕРВИС-КОМ» (МК от 05.12.2023  № ЭА-22012/23) копии сертификатов на и паспорта качества на используемые материалы.